BỘ XÂY DỰNG
Số: 1450/BXD-KTXD	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc	
V/v: điều chỉnh hợp đồng xây dựng.	Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2012	

Kính gửi:	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Thọ	
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 639/SNN-BDA ngày 06/7/2012 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Thọ đề nghị hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Nội dung Hợp đồng xây dựng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ là căn cứ pháp lý cao nhất để các bên tổ chức thực hiện, thanh toán, quyết toán hợp đồng. Theo nội dung văn bản số 639/SNN-BDA, một số dự án đầu tư do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Thọ đang thực hiện theo hình thức hợp đồng theo đơn giá, nên theo quy định của Nhà nước thì những hợp đồng này chỉ được phép điều chỉnh giá khi giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị do Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá theo quy định của Pháp lệnh giá hoặc khi nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng. Trường hợp này cũng chỉ được điều chỉnh nếu được phép của cấp quyết định đầu tư và các bên có thoả thuận trong hợp đồng; không được chuyển sang loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Thọ căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
-	Như trên;
-	Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(®· ký)

Trần Văn Sơn