BỘ XÂY DỰNG
Số: 303/BXD-KTXD	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc	
V/v đơn vị lập dự toán bổ sung trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng.	Hà Nội, ngày 25  tháng 12 năm 2013	

Kính gửi:	Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 – Bộ NN&PTNT	

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 685/BQL-ĐT ngày 06/12/2013 của Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị hướng dẫn việc lập dự toán bổ sung trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo các thỏa thuận trong hợp đồng đã ký và phù hợp với các quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Theo đó, việc xác định giá trị các công việc để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng (dự toán bổ sung) trong quá trình thực hiện hợp đồng thông thường là nghĩa vụ của nhà thầu (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác); việc xem xét (trong đó bao gồm cả việc thẩm định, thẩm tra nếu cần thiết), phê duyệt giá trị điều chỉnh này là nghĩa vụ của chủ đầu tư (chủ hợp đồng). Vì vậy, nếu hợp đồng xây dựng được ký kết giữa các bên không thỏa thuận về việc xác định một đơn vị tư vấn để lập dự toán điều chỉnh, bổ sung giá trị hợp đồng, thì việc nhà thầu thi công xây dựng lập dự toán chi phí điều chỉnh, bổ sung này là phù hợp.    
Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
-	Như trên;
-	Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.	TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

(®· ký)

Phạm Văn Khánh